사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-52

담당부서

작성자

신도시사업2처 /신도시사업2부

과장 김혜린 / 055-922-3540

lh1230@lh.or.kr

사 업 명

평택고덕국제화계획 택지개발지구

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 정부의 미군기지 평택 이전계획에 따른 지역개발사업 일환으로 ‘03년 경기도의 요청에 따라 사업참여

- 주거 및 자족기능, 국제교류거점 확보 등 지역발전을 지원하기 위하여「택촉법」및「주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법」에 의거 국제화계획지구 지정

○ 추진기간 : 2008.5.30 ~ 2025.12.31

○ 총사업비 : 81,603억원

○ 주요내용

- 위치 : 평택시 서정동, 장당동, 지제동, 고덕면 일원

- 면적 : 13,359,578.7㎡

- 인구/주택 : 146,521인(107.8인/ha) / 60,144호

- 사업시행자 : 한국토지주택공사, 경기도, 경기도시공사,    평택도시공사

○ 추진경과

- 2005.12.06 : 평택 지역개발계획 발표

- 2006.09.21 : 지구지정

- 2008.05.30 : 개발계획 승인

- 2009.12.28 : 용지보상 착수

- 2013.01.04 : 개발계획 변경(2차) 및 실시계획 승인

- 2013.01.04 : 개발계획 변경(2차) 및 실시계획 승인

- 2013.10.24 : 1단계 조성공사( 착공

- 2017.01.09 : 2단계 조성공사 착공

- 2019.06.14 : 최초 주민입주

- 2019.07.31  : 1단계 사업준공

- 2021.12.30 :  개발계획 변경(12차) 및 실시계획 변경(10차)

- 2019.07.31  : 1단계 사업준공(2,732천m2)

- 2021.12.31  : 2-1단계 사업준공(2,177천m2)

- 2023.05.04  : 2-2단계 사업준공(1,863천m2)

- 2023.10.05  : 2-3단계 사업준공(132천m2)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자

구분		성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사	신도시사업처장	이경민	1급	'15.11.20～	신도시사업 총괄
	도시사업처장	이치훈	1급	'16.01.05～
		고희권	1급	'18.01.02～
		천호준	1급	'19.08.05～
		신경철	1급	'20.01.02～
		이명하	1급	‘21.01.02～
	신도시사업2처장	신광호	1급	‘22.01.03～
		이상조	1급	‘23.01.01～
	도시사업처 도시사업1부장	천충성	2급	'20.01.16～	고덕 개발업무 (인허가, 개발)
		박민철	2급	‘21.01.14～
	신도시사업2처 신도시사업2부장	김재영	2급	‘22.01.18～
		박중헌	2급	‘23.01.17～
	신도시사업2처 2기신도시사업2팀장	박중헌	2급	‘24.01.11～
	도시사업처 도시설계부장	문홍철	2급	'20.01.16～	고덕 설계업무
		최영환	2급	‘21.01.14～
	신도시계획처 신도시설계단장	이영헌	2급	‘22.01.18～
	신도시사업처 안산과천사업부장	박희대	2급	‘23.01.13～
	신도시사업2처 2기신도시사업1팀장	김수한	2급	‘24.01.11～
지역본부	경기지역본부장	김요섭	1급	'20.01.02～	경기지역본부 사업총괄
		김성호	1급	‘21.01.02～
		권세연	1급	‘22.01.03～
	평택사업본부장	황필재	1급	'20.01.02～	고덕 사업총괄
		전윤수	1급	‘21.01.02～
		강신정	1급	‘21.10.13～
		정상훈	1급	‘23.01.01～
	평택사업본부 보상부장	이상철	2급	'20.01.16～	고덕 보상업무 (보상총괄)
	평택사업본부 판매부장	오태식	2급	'20.01.16～	고덕 판매업무 (판매총괄)
	평택사업본부 보상토지판매부장	노재곤	2급	‘21.01.14～	고덕 보상판매업무
	평택사업본부 토지판매부	민병구	2급	‘22.01.18～	고덕 보상판매업무
	평택사업본부 보상판매부	심종현	2급	‘23.01.17～	고덕 보상판매업무
	평택사업본부 보상판매팀	김성수	2급	‘24.01.11～	고덕 보상판매업무
	평택사업본부 단지사업1부장	이재건	2급	'20.01.16～	고덕 개발업무 (단지개발총괄)
		정상오	2급	‘21.01.14～
		원성진	2급	‘22.01.18～
		홍승완	2급	‘23.01.17～
	평택사업본부 단지사업1팀장	홍승완	2급	‘24.01.11～
	평택사업본부 단지사업2부장	이호기	2급	'20.01.16～	고덕 기반시설 (단지개발)
		조창종	2급	‘21.01.14～
		안태환	2급	‘22.01.18～
		박근선	2급	‘23.01.17～
	평택사업본부 단지사업2팀장	양혜랑	2급	‘24.01.11～
	평택사업본부 단지사업3부장	송기능	2급	'20.01.16～
		류형열	2급	‘21.01.14～
		김상윤	2급	‘22.01.18～
	평택사업본부 단지사업3팀장	윤광현	2급	‘24.01.11～
	평택사업본부 주택사업부장	안광수	2급	'20.01.16～	고덕 주택업무 (주택건설사업총괄)
		황성목	2급	‘21.01.14～
		정광욱	2급	‘23.01.17～
	평택사업본부 주택품질팀장	정광욱	2급	‘24.01.11～

다른기관 또는

민간인 관련자

소속	직위	성명	담당업무 (업무분담 내용)
국토교통부 부동산개발산업과	과장	박동주	신도시사업 총괄 (인허가 승인)
국토교통부 부동산개발산업과	사무관	김정민	고덕신도시 개발 (인허가 승인)
경기도 택지개발과	과장	김영선	고덕 사업총괄 (공동사업 시행)
평택시 도시개발과	과장	이상기	고덕 사업총괄 (공동사업 시행)
경기도시공사 택지사업단	처장	이순례	고덕 사업총괄 (공동사업 시행)
평택도시공사 건설사업처	처장	김관식	고덕 사업총괄 (공동사업 시행)

추진실적

○ 2004.12.31 : 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 공포

○ 2005.12.06 : 평택 지역개발계획 발표

○ 2006.09.21 : 지구지정

○ 2008.05.30 : 개발계획 승인

○ 2009.12.28 : 용지보상 착수

○ 2012.01.03 : 개발계획 변경 승인

○ 2013.01.04 : 개발계획 변경(2차) 및 실시계획 승인

○ 2013.10.24 : 1단계 조성공사(1-1·2공구) 착공

○ 2013.11.29 : 1단계 조성공사(1-3공구) 착공

○ 2015.04.03 : 개발계획 변경(3차) 및 실시계획 변경

○ 2015.12.21 : 택지공급(A16)

○ 2016.09.29 : 택지공급(A10)

○ 2016.12.16 : 개발계획 변경(4차) 및 실시계획 변경(2차) 승인

○ 2017.01.06 : 택지공급(A44)

○ 2017.01.09 : 택지공급(A40)

○ 2017.01.09 : 2단계 조성공사(2-1공구) 착공

○ 2017.03.27 : 2단계 조성공사(2-2공구) 착공

○ 2017.12.22 : 개발계획 변경(5차) 및 실시계획 변경 (3차) 승인

○ 2018.01.05 : 2단계 조성공사(2-3공구) 착공

○ 2018.07.05 : 개발계획 변경(6차) 및 실시계획 변경(4차) 승인

○ 2018.12.26 : 개발계획 변경(7차) 및 실시계획 변경(5차) 승인

○ 2018.12.26 : 개발계획 변경(7차) 및 실시계획 변경(5차) 승인

○ 2019.06.17 : 개발계획 변경(8차) 및 실시계획 변경(6차) 승인

○ 2019.07.31 : 1단계 사업준공

○ 2020.11.09 : 개발계획 변경(10차) 및 실시계획 변경(8차) 승인

○ 2021.11.10 : 개발계획 변경(11차) 및 실시계획 변경(9차) 승인

○ 2021.12.30 : 개발계획 변경(12차) 및 실시계획 변경(10차) 승인

○ 2021.12.31 : 2-1단계 사업준공

○ 2022.12.23 : 개발계획 변경(13차) 및 실시계획 변경(11차) 승인

○ 2023.03.24 : 지정(11차) 개발계획 변경(14차) 및 실시계획 변경(12차) 승인

○ 2023.05.04 : 2-2단계 사업준공

○ 2023.08.21 : 지정(12차) 개발계획 변경(15차) 및 실시계획 변경(13차) 승인

○ 2023.10.05 : 2-3단계 사업준공