사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-54

담당부서

작성자

공공택지사업처 / 공공택지사업2팀

차장 우연근 / 055-922-3811 / wyk4266@lh.or.kr

사 업 명

하남감일 공공주택지구

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 무주택자의 주택마련을 촉진하여 국민의 쾌적한 주거생활에 이바지하는 공공주택을 원활히 건설하기 위함

○ 추진기간 : 2010.05.26 ~ 2024.12.31

(1단계 : ‘20.12, 2단계 : ’22.06, 3단계 : ’24.03, 4단계 : ‘24.12)

○ 총사업비 : 24,920억원

○ 주요내용

- 위치 : 경기도 하남시 감일동, 감이동 일원

- 면적 : 1,685,848.2㎡

(1단계 1,099,175.9㎡, 2단계 233,918.9㎡, 3단계 134,150㎡, 4단계 218,603.4)

- 세대수 : 13,797세대(33,373인)

- 사업시행자 : 한국토지주택공사, 현대건설(주)컨소시엄

○ 추진경과

- 2010.05.26.  : 지구지정 고시

- 2010.11.11. : 보금자리주택 사전 입주예약 공고

- 2010.11.15. : 개발계획 승인

- 2013.12.17. : 용지보상 착수

- 2016.06.28. : 사업시행자 변경(민간공동) 및 공사착공

- 2019.06.28. : 최초 주민입주

- 2020.12.31. : 1단계 사업준공(1,099천㎡)

- 2022.06.30. : 2단계 사업준공(234천㎡)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 담당자 및 담당업무

구분		성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사	국토도시개발본부장	신경철	상임 이사	2021.07∼	국토도시개발사업총괄
	국토도시개발본부장	박동선	상임 이사	2023.03∼
	스마트도시계획처장	장희철	1급	2021.07～	공공주택지구 사업총괄
	공공택지사업처장	문홍철	1급	2022.01∼	공공택지사업처 총괄
	공공택지사업처장	이상우	1급	2023.01∼
	공공택지사업처장	이원훈	1급	2024.01∼
	도시개발부장	김형욱	2급	2021.01∼	도시개발사업관리
	건축공간계획팀장	김남훈	2급	2022.01∼	택지개발사업관리
	공공택지사업2부장	김경수	2급	2023.01∼
	공공택지사업2팀장	김동인	2급	2024.01∼
하남사업본부	본부장	유석태	1급	2021.01∼	하남사업본부 총괄
	본부장	정경호	1급	2022.01∼
	본부장	이영웅	1급	2023.01.∼
	단지사업3부	이성운	2급	2020.01∼	조성개발 업무총괄
	단지사업3부	신동수	2급	2022.01∼	조성개발 업무총괄
	단지사업3부	이동천	2급	2024.01∼	조성개발 업무총괄
	보상판매	박만수	2급	2021.01∼	보상판매 업무총괄
	보상판매	박상천	2급	2022.01∼	보상판매 업무총괄
	보상부	문기홍	2급	2021.01∼	보상 업무총괄
	보상부	박만수	2급	2022.01∼	보상 업무총괄
	판매팀	한국일	2급	2024.01∼	판매 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

소속	직위	성명	담당업무 (업무분담 내용)
국토교통부 공공택지관리과	과장	박우성	공공주택사업 총괄 (인허가 승인)
	사무관	배상철	하남미사 개발 (인허가 승인)
하남시청 미래도시사업단	단장	심영욱	하남미사 개발 (인허가 협의)
	과장	최용헌	하남미사 개발 (인허가 협의)

추진실적

- 2010.05.26.  : 지구지정 고시

- 2010.11.11. : 보금자리주택 사전 입주예약 공고

- 2010.11.15. : 지정변경(1차), 지구계획 승인

- 2013.12.17. : 용지보상 착수

- 2014.10.14. : 지정변경(2차), 지구계획(1차) 변경 승인

- 2016.03.31. : 사업시행자 변경(민간공동) 및 공사착공

- 2016.12.28. : 지구계획(2차) 변경 승인

- 2018.08.29. : 지구계획(3차) 변경 승인

- 2019.06.28. : 최초 주민입주

- 2019.10.23. : 지정변경(3차), 지구계획(4차) 변경 승인

- 2020.01.29. : 지구계획(5차) 변경 승인

- 2020.09.23. : 지구계획(6차) 변경 승인

- 2020.12.23. : 지구계획(7차) 변경 승인

- 2020.12.31. : 1단계 사업준공(1,099천㎡)

- 2021.12.24. : 지구계획(8차) 변경 승인

- 2021.12.31. : 지구계획(9차) 변경 승인

- 2022.06.30. : 2단계 사업준공(234천㎡)

- 2022.06.30. : 지구계획(10차) 변경 승인

- 2023.12.01. : 지구계획(11차) 변경 승인