사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-56

담당부서

작성자

지역균형발전처 / 박창민대리 / 055-922-4640

changmin@lh.or.kr

사 업 명

행정중심복합도시

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 수도권의 과도한 집중에 따른 부작용을 시정하여 국가의 균형발전과 국가경쟁력의 강화에 기여

○ 추진기간 : 2005.05.24 ～ 2030.12.31

○ 총사업비 : 14.00조원

○ 주요내용

- 위 치 : 세종시 대평동, 한솔동, 연기면 일원

- 면 적 : 73㎢(2,205만평)

- 인구/주택 : 50만명 / 20만호

- 사업시행자 : 한국토지주택공사

○ 추진경과

- 2005.05.24. : 예정지역 및 주변지역, 사업시행자 지정

- 2005.10.05. : 중앙행정기관 등의 이전계획 수립

- 2005.12.20. : 토지보상 착수

- 2006.11.29. : 최초 개발계획 승인

- 2007.07.04. : 최초 실시계획 승인

- 2007.07.20. : 부지조성공사 착수

- 2012.11.    : 1단계 중앙행정기관 이전

- 2013.11.    : 2단계 중앙행정기관 이전

- 2014. 6.    : 1차 사업준공(첫마을)

- 2014.12.    : 3단계 중앙행정기관 이전

- 2015.04.    : 2차 사업준공

- 2015.09.    : 3차 사업준공

- 2016.12.    : 4차 사업준공

- 2017.09.    : 5차 사업준공

- 2019.09.    : 6차 사업준공

- 2020.03.    : 7차 사업준공

- 2020.08.    : 8-1차 사업준공

- 2021.03.    : 8-2차 사업준공

- 2022.09.    : 8-3차 사업준공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 담당자 및 담당업무

구분		성명		직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사	지역균형본부장	김재경		본부장	2024.1∼	지역균형본부 총괄
	지역균형발전처장	주민곤		1급	2024.1∼	지역균형발전처 총괄
	지역균형사업1팀	임종철		2급	2024.1∼	행복도시 사업총괄
세종특별본부	세종특별본부장	송종호		1급	2024.01～	행복도시 사업총괄
	사업관리처장	김태욱		1급	2024.01～	사업관리 총괄
	단지사업처장	원성진		1급	2024.01～	단지사업 총괄
	주택사업처장	김수진		1급	2024.01～	주택사업 총괄
	국가스마트시티사업단장	오홍택		2급	2023.01～	국가시범도시사업 총괄
	경영지원팀장	유완상		2급	2023.01～	경영지원 업무
	사업관리팀장	양정미		2급	2024.01～	사업관리 업무
	보상판매팀장	김재현		2급	2024.01～	보상판매 업무
	주택판매팀장	이대식		2급	2023.01～	주택판매 업무
	주거복지지사장	최계영		2급	2024.01～	주거복지지사 업무
	사업계획팀장	송봉혁		2급	2024.01～	단지사업 총괄
	복합사업팀장	임산		2급	2022.01～	인허가 총괄
	단지설계팀장	이태영		2급	2023.01～	단지설계 총괄
	단지사업1팀장	채성진		2급	2024.01～	5생활권 및 기반시설 (도로, 환경, 전기) 총괄
	단지사업2팀장	이진국		2급	2023.01～	1,4,6생활권 단지사업 총괄
	단지사업3팀장	조은성		2급	2024.01～	2,3생활권 단지사업 및 조경 총괄
	주택사업팀장	최승영		2급	2024.01～	주택사업인허가 총괄
	주택품질팀장	최태영		2급	2024.01～	주택품질업무 총괄
	분양주택관리팀장	이호영		2급	2023.01～	분양주택관리 총괄
	시범도시계획팀장	윤동수		2급	2024.01～	국가시범도시 기획총괄
	시범도시사업팀장	이권한		2급	2024.01～	국가시범도시 스마트서비스 총괄
	안전관리단장	이광호	2급		2024.01～	재난안전, 품질, 시설물 인계인수

다른기관 또는

민간인 관련자

소속	직위	성명	담당업무 (업무분담 내용)
행정중심복합도시 건설청 도시정책과	과장	홍순민	행복도시 인,허가 총괄 (인허가 승인)
행정중심복합도시 건설청 도시정책과	사무관	윤상민	행복도시 인,허가 업무

추진실적

○ 2005.05.24. : 예정지역 및 주변지역, 사업시행자 지정

○ 2005.10.05. : 중앙행정기관 등의 이전계획 수립

○ 2005.12.20. : 토지보상 착수

○ 2006.11.29. : 최초 개발계획 승인

○ 2007.07.04. : 최초 실시계획 승인

○ 2007.07.20. : 부지조성공사 착수

○ 2012.11.    : 1단계 중앙행정기관 이전

○ 2013.11.    : 2단계 중앙행정기관 이전

○ 2014.06.23. : 1차 사업준공

○ 2014.12.    : 3단계 중앙행정기관 이전

○ 2015.01.05. : 개발계획(32차)변경 승인

○ 2015.03.12. : 실시계획(25차)변경 승인

○ 2015.04.09. : 2차 사업준공

○ 2015.05.06. : 개발계획(33차)변경 승인

○ 2015.05.07. : 실시계획(26차)변경 승인

○ 2015.07.03. : 개발계획(34차)변경 승인

○ 2015.07.24. : 실시계획(27차)변경 승인

○ 2015.09.04. : 3차 사업준공

○ 2015.10.05. : 개발계획(35차)변경 승인

○ 2015.11.23. : 개발계획(36차)변경 승인

○ 2015.11.27. : 실시계획(28차)변경 승인

○ 2016.01.05. : 개발계획(37차), 실시계획(29차)변경 승인

○ 2016.05.25. : 개발계획(38차)변경 승인

○ 2016.06.16. : 실시계획(32차)변경 승인

○ 2016.08.18. : 개발계획(39차)변경 승인

○ 2016.08.24. : 실시계획(33차)변경 승인

○ 2016.12.29. : 4차 사업준공

○ 2017.01.20. : 개발계획(40차), 실시계획(34차) 변경 승인

○ 2017.04.10. : 실시계획(35차)변경 승인

○ 2017.05.24. : 개발계획(41차), 실시계획(36차)변경 승인

○ 2017.07.04. : 개발계획(42차), 실시계획(37차)변경 승인

○ 2017.10.10. : 개발계획(43차), 실시계획(38차)변경 승인

○ 2017.10.13. : 5차 사업준공

○ 2018.03.13. : 개발계획(44차), 실시계획(39차)변경 승인

○ 2018.04.02. : 개발계획(45차)변경 승인

○ 2018.05.25. : 개발계획(46차)변경 승인

○ 2018.06.12. : 실시계획(40차)변경 승인

○ 2018.09.28. : 개발계획(47차), 실시계획(41차)변경 승인

○ 2019.01.03. : 실시계획(42차)변경 승인

○ 2019.04.10. : 개발계획(48차), 실시계획(43차)변경 승인

○ 2019.05.28. : 개발계획(49차), 실시계획(44차)변경 승인

○ 2019.07.04. : 개발계획(50차)변경 승인

○ 2019.07.30. : 실시계획(45차)변경 승인

○ 2019.10.02. : 개발계획(51차), 실시계획(46차)변경 승인

○ 2019.10.04. : 6차 사업준공

○ 2019.12.03. : 개발계획(52차)변경 승인

○ 2020.01.09. : 개발계획(53차), 실시계획(47차)변경 승인

○ 2020.06.11. : 개발계획(54차), 실시계획(48차)변경 승인

○ 2020.07.08. : 7차 사업준공

○ 2020.09.01. : 8-1차 사업준공

○ 2020.09.25. : 개발계획(55차), 실시계획(49차)변경 승인

○ 2021.01.04. : 개발계획(57차), 실시계획(51차)변경 승인

○ 2021.02.22. : 개발계획(58차)변경 승인

○ 2021.04.05. : 8-2차 사업준공

○ 2021.05.17. : 실시계획(52차)변경 승인

○ 2021.07.09. : 개발계획(59차), 실시계획(53차)변경 승인

○ 2021.12.15. : 개발계획(60차), 실시계획(54차)변경 승인

○ 2021.12.24. : 개발계획(61차) 변경 승인

○ 2022.03.28. : 개발계획(62차), 실시계획(55차)변경 승인

○ 2022.07.05. : 개발계획(63차), 실시계획(56차)변경 승인

○ 2022.09.08. : 8-3차 사업준공

○ 2022.10.07. : 개발계획(64차), 실시계획(57차)변경 승인

○ 2023.04.14. : 개발계획(65차), 실시계획(58차)변경 승인

○ 2023.06.20. : 개발계획(66차), 실시계획(59차)변경 승인

○ 2023.11.23. : 개발계획(67차), 실시계획(60차)변경 승인

○ 2023.12.22. : 개발계획(68차) 변경 승인