사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2025-22(명지)

2025-23(명지2)

담당부서

작성자

산업단지처 / 박홍주차장 / 055-922-4777/redwine@lh.or.kr

사 업 명

부산‧진해경제자유구역 명지지구 개발사업(2단계 포함)

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 동북아지역의 물동량 선점, 비즈니스 거점화 필요

- 국제업무 및 해사 관련 업종의 종사자를 위한 쾌적한 정주공간 마련 및 직주근접이 가능토록 중추기능과 주거기능의 입지를 계획

- 외국인 투자유치를 통한 국제업무 ,신도시 조성

○ 추진기간 : 2003.10.30 ∼ 2026.12.31

○ 총사업비 : 3조 6,856억원

○ 주요내용

- 위치 : 부산광역시 강서구 명지동 일원

- 면적 : 6,398천㎡

- 인구/주택 : 75,986인 / 28,602호

- 사업시행자 : 한국토지주택공사

○ 추진경과

- 2003.10.30 : 부산진해경제자유구역 지정 고시

- 2005.01.17 : 개발제한구역 해제

- 2008.02.28 : 개발계획 변경 및 사업시행자 지정(LH)

- 2008.12.31 : 최초 실시계획 승인

- 2010.03.25 : 용지보상 착수

- 2010.05.24 : 대지조성공사 착공

- 2015.06.30 : 최초 주민입주

- 2015.12.29 : 1-1단계 사업준공

- 2017.10.27 : 1-2단계 사업준공

- 2017.12.26 : 개발계획 변경승인(2단계 최초)

- 2019.07.31 : 2단계 최초 실시계획 승인

- 2021.04.07 : 1-3단계 사업준공

- 2023.04.05 : 1-4단계 사업준공

- 2025.04.30 : 1-5단계 사업준공(예정)

- 2026.12.31 : 2단계 사업준공(예정)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자

구분		성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사	지역균형발전본부장	강오순	본부장	2025.1~	지역균형발전본부 사업총괄
	산업단지처장	김명수	1급	2024.1~	산업단지처 사업총괄
	국가산단사업 1팀장	허준영	2급	2025.1~	국가·일반산단 경자구역 사업총괄
부산울산지역본부	부산울산지역본부장	최희숙	1급	2024.1∼	부산울산지역본부 사업총괄
	판매팀장	정영훈	2급	2024.1∼	명지지구 판매총괄
	부산진해 사업팀장	김재영	2급	2024.1∼	명지지구 사업총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

소속	직위	성명	담당업무 (업무분담 내용)
산업통상자원부 경제자유구역기획단 개발투자지원팀	팀장	조원철	경자구역총괄 (인허가 승인)
	사무관	이구호	명지지구 개발 (인허가 승인)
부산진해 경제자유구역청 개발본부	본부장	박성호	부산지역개발 총괄 (인허가 승인)
	개발1과장	주성진	명지개발 총괄 (인허가승인,협의)

추진실적

○ 2003.10.30 : 부산진해경제자유구역 지정 고시

○ 2005.01.17 : 부산광역시 도시관리계획 변경 결정(GB해제)

○ 2008.02.28 : 명지지구 개발계획 변경(1차)

○ 2008.12.31 : 개발계획 변경(2차) 및 실시계획 승인

○ 2010.03.25 : 용지보상 착수

○ 2010.05.24 : 대지조성공사 착공(4·5공구)

○ 2010.07.20 : 대지조성공사 착공(1·2·3공구)

○ 2011.10.17 : 개발계획 변경(3차) 승인

○ 2011.10.19 : 실시계획 변경(1차) 승인

○ 2013.04.26 : 개발계획 변경(4차) 승인

○ 2013.07.24 : 실시계획 변경(2차) 승인

○ 2013.12.31 : 개발계획 변경(5차) 승인

○ 2014.04.16 : 실시계획 변경(3차) 승인

○ 2014.07.14 : 개발계획 변경(6차) 승인

○ 2014.08.06 : 실시계획 변경(4차) 승인

○ 2015.03.18 : 개발계획 변경(7차) 승인

○ 2015.03.25 : 실시계획 변경(5차) 승인

○ 2015.06.30 : 최초 주민입주, 대지조성공사 준공(2공구)

○ 2015.07.24 : 개발계획 변경(8차) 승인

○ 2015.10.21 : 실시계획 변경(6차) 승인

○ 2015.12.24 : 개발계획 변경(9차) 승인

○ 2015.12.24 : 실시계획 변경(7차) 승인

○ 2015.12.29 : 1-1단계 사업준공

○ 2016.06.09 : 개발계획 변경(10차) 승인

○ 2016.06.15 : 실시계획 변경(8차) 승인

○ 2016.06.30 : 대지조성공사 준공(4공구)

○ 2016.07.24 : 대지조성공사 준공(5공구)

○ 2016.12.30 : 개발계획 변경(11차) 승인

○ 2017.04.12 : 실시계획 변경(9차) 승인

○ 2017.06.21 : 개발계획 변경(12차) 승인

○ 2017.06.28 : 실시계획 변경(10차) 승인

○ 2017.08.03 : 부산광역시 도시관리계획 변경 결정(GB해제)

○ 2017.11.01 : 1-2단계 사업준공

○ 2017.12.26 : 개발계획 변경(13차) 승인 (예비지포함)

○ 2018.01.03 : 실시계획 변경(11차) 승인(1-3단계 사업준공 연장)

○ 2018.11.22 : 개발계획 변경(14차) 승인

○ 2019.07.31 : 실시계획 변경(12차) 승인

○ 2019.12.24 : 실시계획 변경(13차) 승인

○ 2020.09.09 : 개발계획 변경(15차) 승인

○ 2021.02.02 : 개발계획 변경(17차) 승인

○ 2021.02.24 : 실시계획 변경(16차) 승인

○ 2021.04.07 : 1-3단계 사업준공

○ 2021.05.14 : 개발계획 변경(16차) 승인

○ 2021.12.22 : 실시계획 변경(17차) 승인

○ 2022.04.13 : 실시계획 변경(18차) 승인

○ 2022.10.26 : 개발계획 변경(18차) 승인

○ 2022.12.21 : 실시계획 변경(19차) 승인

○ 2023.04.05 : 1-4단계 사업준공

○ 2023.07.17 : 개발계획 변경(19차) 승인

○ 2024.01.10 : 실시계획 변경(20차) 승인

○ 2024.05.28 : 개발계획 변경(20차) 승인

○ 2024.06.05 : 실시계획 변경(21차) 승인

○ 2024.12.13 : 개발계획 변경(21차) 승인

○ 2024.12.18 : 실시계획 변경(22차) 승인

○ 2025.04.30 : 1-6단계 사업준공 (예정)

○ 2026.12.31 : 2단계 사업준공 (예정)