사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2025-34

담당부서

작성자

신도시사업2처 / 2기신도시사업팀

과장 정재진/055-922-3548/

jj0806@lh.or.kr

사 업 명

아산탕정

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 난개발을 방지하며 인근 산업단지의 배후지원 도시기능을   수행하기 위한 자족형 도시조성

○ 추진기간 : 2007.12.04 ~ 2025.06.30

(1단계 : ‘16.04, 2단계 : ’16.12, 3단계 : ‘21.12, 4단계 : ’23.12, 5단계 : ’25.06)

○ 총사업비 : 32,382억원

○ 주요내용

- 위치 : 충남 천안시 불당·백석동, 아산시 배방읍·탕정면 일원

- 면적 : 5,131,533.6㎡

(1단계 1,680,205.9㎡, 2단계 448,302.9㎡, 3단계 2,403,536.0㎡,

4단계 342,197.1㎡, 5단계 320,291.7㎡)

- 세대수 : 26,845세대(62,892인)

- 사업시행자 : 한국토지주택공사

○ 추진경과

- 2005.12.30. : 택지개발사업 예정지구지정

- 2007.12.04. : 개발계획 승인

- 2009.03.19. : 용지보상 착수

- 2009.12.02. : 실시계획(1단계) 승인

- 2011.06.28. : 예정지구(4차) 변경(534만평→156만평)

- 2011.12.07. : 대지조성공사 착공

- 2013.08.29. : 최초 주택분양

- 2015.11.17. : 최초 주민입주

- 2016.04.30. : 1단계 사업준공(1,680천㎡)

- 2016.12.31. : 2단계 사업준공(448천㎡)

- 2021.12.31. : 3단계 사업준공(2,341천㎡)

- 2023.12.31 : 4단계 사업준공(342천㎡)

- 2025.06.30 : 5단계 사업준공(320천㎡)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업관련자

구분		성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사	도시사업처장	이명하	1급	2021.01.02∼	도시사업처 총괄
	신도시사업2처장	신광호	1급	‘22.01.03～	신도시사업2처 총괄
		이상조	1급	‘23.01.02～
		박중헌	1급	‘25.01.02～
	도시사업처 도시사업2부장	김성수	2급	2020.01.16∼	아산탕정 개발업무 (인허가, 개발)
	신도시사업2처 신도시사업2부장	김재영	2급	‘22.01.18～
		박중헌	2급	‘23.01.17～
	신도시사업2처 2기신도시사업2팀장	박중헌	2급	2024.01.11∼
	신도시사업2처 2기신도시사업팀장	임철우	2급	‘25.01.09～
지역본부	대전충남지역 본부장	송진선	1급	2021.01.02∼	대전충남본부 총괄
		한종덕	1급	2022.01.03∼
		이종우	1급	‘23.01.02～
		류옥현	1급	‘24.01.02～
		양지훈	1급	‘25.01.02～
	대전충남지역본부 사업관리처장	김응태	1급	2021.01.02∼	사업관리 업무총괄
	대전충남지역본부 지역재생 건설사업처장	김흥재	1급	2021.01.02∼	건설사업 업무총괄
		안한근	1급	2022.01.03∼
	대전충남지역본부 건설사업처장	안한근	1급	‘23.01.02～
		유근호	1급	‘23.09.18～
		이준식	1급	‘25.01.02～
	대전충남지역본부 주거복지사업처장	공영규	1급	2022.01.03∼	주거복지사업 업무총괄
		공영규	1급	‘23.01.02～
		김경진	1급	‘25.01.02～
	천안아산사업단장	강규진	2급	2021.01.14∼	아산사업단 업무총괄
		이동찬	2급	2022.01.18∼	천안아산사업단 업무총괄
		이정희	2급	‘23.01.17～
		한현동	2급	‘24.01.11～
		한현동	2급	‘25.01.09～
	천안아산사업단 단지사업부장	이태영	2급	2021.01.14∼	천안아산사업단 단지사업 업무총괄
		김탁용	2급	‘23.01.17～
	천안아산사업단 단지사업팀장	김탁용	2급	’23.01.11～
		박정수	2급	‘25.01.09～
	천안아산사업단 주택사업부장	손종규	2급	2020.01.14∼	천안아산사업단 주택사업 업무총괄
		이길노	2급	‘23.01.17～
	천안아산사업단 주택사업팀장	황성호	2급	‘24.01.11～
		황성호	2급	‘25.01.09～

다른기관 또는

민간인 관련자

소속	직위	성명	당담업무 (업무분담 내용)
국토교통부 부동산개발산업과	과장	김동준	신도시사업 총괄 (인허가 승인)
국토교통부 부동산개발산업과	사무관	장민향	아산탕정신도시 개발 (인허가 승인)
천안시 도시계획과장	과장	이강탁	도시계획업무 총괄
아산시 도시개발과장	과장	윤수진	도시개발업무 총괄

추진실적

○ 2005.12.30. : 택지개발사업 예정지구지정

○ 2007.12.04. : 개발계획 승인

○ 2009.03.19. : 용지보상 착수

○ 2009.12.02. : 지구지정(3차) 및 개발계획(2차) 변경, 실시계획 승인

○ 2011.06.28. : 예정지구(4차) 변경(534만평→156만평)

○ 2011.12.07. : 대지조성공사 착공

○ 2012.07.05. : 지구지정(5차), 개발계획(3차), 실시계획(1차) 변경 승인

○ 2013.08.29. : 최초 주택분양

○ 2015.05.06. : 지구지정(6차), 개발계획(4차), 실시계획(2차) 변경 승인

○ 2015.11.17. : 최초 주민입주

○ 2015.12.04. : 개발계획(5차) 및 실시계획(3차) 변경 승인

○ 2016.01.31. : 1공구 공사준공

○ 2016.04.28. : 지구지정(7차), 개발계획(6차), 실시계획(4차) 변경 승인

○ 2016.04.30. : 1단계 사업준공(1,680천㎡)

○ 2016.05.31. : 2공구 공사준공

○ 2016.05.31. : 2공구 공사준공

○ 2016.10.07. : 지구지정(8차), 개발계획(7차), 실시계획(5차) 변경 승인

○ 2016.12.19. : 지구지정(9차), 개발계획(8차), 실시계획(6차) 변경 승인

○ 2018.12.26. : 개발계획(9차) 및 실시계획(7차) 변경 승인

○ 2016.12.31. : 2단계 사업준공(448천㎡)

○ 2019.06.05 : 개발계획(10차) 및 실시계획(8차) 변경 승인

○ 2019.12.30 : 개발계획(11차) 및 실시계획(9차) 변경 승인

○ 2020.09.20. : 3공구 공사준공

○ 2020.11.25 : 개발계획(12차) 및 실시계획(10차) 변경 승인

○ 2021.06.28 : 개발계획(13차) 및 실시계획(11차) 변경 승인

○ 2021.11.12 : 개발계획(14차) 및 실시계획(12차) 변경 승인

○ 2021.12.28 : 지구지정(10차), 개발계획(15차), 실시계획(13차) 변경 승인

○ 2021.12.31. : 3단계 사업준공(2,341천㎡)

○ 2022.04.29 : 개발계획(16차) 및 실시계획(14차) 변경 승인

○ 2023.06.23 : 개발계획(17차) 및 실시계획(15차) 변경 승인

○ 2023.11.13 : 개발계획(18차) 및 실시계획(16차) 변경 승인

○ 2023.12.28. : 지구지정(11차), 개발계획(19차), 실시계획(17차) 변경 승인

○ 2024.02.08 : 4단계 사업준공(342천㎡)