사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2025-53

담당부서

작성자

지역균형계획처/

박형준/055-922-4686/

waara77@lh.or.kr

사 업 명

평택미군기지 건설사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 주한미군의 안정적 주둔여건 보장과 효율적인 국토활용을 통한 국가의 균형발전 도모를 위해 용산미군기지를 평택으로 이전

○ 추진기간 : 2005.01.24 ∼ 2024.12.31

○ 총사업비 : 약 3.4조원(협약기준)

○ 주요내용

- 평택에 미군기지를 건설하여 국방부에 기부하고, 그 대가로 서울(용산)소재 부지를 양여받아 개발사업 시행

• 기부사업 : 평택 미군기지 총 35개 프로젝트 건설

• 양여사업 : 용산소재 4개 양여부지 인수, 개발 및 매각

* 니블로베럭스, 유엔사, 캠프킴, 수송부

- 사업시행자 : 한국토지주택공사

○ 추진경과

- '07.11.: 주한미군 시설사업 시행협약 체결 (주공↔국방부)

- '07.12.: 주한미군기지 이전사업 관련 국유재산관리계획 확정

- '08.03.: Parcel-K 프로젝트 권리의무승계․시공 참여

- '08.07.: 주한미군 시설사업 업무수행절차서 제정(MURO, LH)

- '09.08.: Parcel-2B 프로젝트(최초 자체 발주) 착공

- '11.11.: 주한미군 시설사업 시행협약 변경 (LH↔국방부)

- '12.06.: 주한미군 시설사업 업무수행절차서 개정

- '14.12.: 기부시설물 원가기준 및 정산 합의서 체결

- '16.01.: 니블로배럭스 부지 양여

- '16.12.: 유엔사 부지 양여

- '17.09.: 1단계 기부 합의서 체결

- '18.06.: 주한미군기지사령부 캠프험프리(평택) 이전

- '21.03.: 35개 건설프로젝트 준공 및 인계완료

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 담당자 및 담당업무 (* 개별 사업지구의 경우 관련 담당자 모두 기재)

구분		성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사	지역균형계획처	주민곤	1급	‘24.01.02∼	지역균형발전사업 총괄
	지역균형계획처 국유지사업팀	신태식	2급	‘25.01.09∼	국유지사업 총괄
지역본부	서울지역본부장	박현근	1급	‘24.01.02∼	서울지역본부 총괄
	용산공원사업본부	유건석	1급	'25.01.02∼	용산공원사업본부 총괄
	용산공원사업본부 용산사업계획팀장	이명	2급	‘25.01.09∼	용산공원사업본부 사업계획업무 총괄
	용산공원사업본부용산복합개발팀장	전영준	2급	‘25.01.09∼	도시재생혁신지구, 산재부지 개발, 평택미군기지건설사업 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

국토교통부 용산공원조성추진기획단

국방부 주한미군기지이전사업단

추진실적

○ 기부사업

- '09.08.: Parcel-2B 프로젝트 착공(최초 자체 발주)

- '14.12.: 기부시설물 원가기준 및 정산 합의서 체결

- '17.09.: 1단계(니블로베럭스) 기부 합의서 체결

- ’20.05.: 1단계 기부정산 소송 제소(LH원고↔국방부피고)

* 기부정산 기준관련 이견발생으로 약 3년간 기부지연

- ’21.03.: 평택미군기지 건설(준공·인수인계) 완료

- ’23.12.: 1단계 기부정산 소송 종결

- 현  재: 1단계 기부정산절차 진행 중

○ 양여사업

- '15.08.: 니블로배럭스 부지 양여합의서 체결

- '16.01.: 니블로배럭스 부지 양여

- '16.04.: 유엔사 부지 양여합의서 체결

- '16.05.: 니블로배럭스 부지 매각

- '16.12.: 유엔사 부지 양여

- '17.07.: 유엔사 부지 매각