사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2025-54

담당부서

작성자

공공택지사업처 / 공공택지사업2팀

과장 곽성운 / 055-922-3816 / ksu@lh.or.kr

사 업 명

하남감일 공공주택지구

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 무주택자의 주택마련을 촉진하여 국민의 쾌적한 주거생활에 이바지하는 공공주택을 원활히 건설하기 위함

○ 추진기간 : 2010.05.26 ~ 2024.12.31

(1단계 : ‘20.12, 2단계 : ’22.06, 3단계 : ’24.03, 4단계 : ‘24.12)

○ 총사업비 : 24,920억원

○ 주요내용

- 위치 : 경기도 하남시 감일동, 감이동 일원

- 면적 : 1,685,847.7㎡

(1단계 1,099,175.9㎡, 2단계 233,918.9㎡, 3단계 137,644.9㎡, 4단계 215,108㎡)

- 세대수 : 13,797세대(33,373인)

- 사업시행자 : 한국토지주택공사, 현대건설(주)컨소시엄

○ 추진경과

- 2010.05.26.  : 지구지정 고시

- 2010.11.11. : 보금자리주택 사전 입주예약 공고

- 2010.11.15. : 개발계획 승인

- 2013.12.17. : 용지보상 착수

- 2016.06.28. : 사업시행자 변경(민간공동) 및 공사착공

- 2019.06.28. : 최초 주민입주

- 2020.12.31. : 1단계 사업준공(1,099천㎡)

- 2022.06.30. : 2단계 사업준공(234천㎡)

- 2024.03.31. : 3단계 사업준공(138천㎡)

- 2024.12.31. : 4단계 사업준공(215천㎡)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 담당자 및 담당업무

구분		성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사	국토도시개발본부장	신경철	상임 이사	2021.07∼	국토도시개발사업총괄
	국토도시개발본부장	박동선	상임 이사	2023.03∼
	스마트도시계획처장	장희철	1급	2021.07～	공공주택지구 사업총괄
	공공택지사업처장	문홍철	1급	2022.01∼	공공택지사업처 총괄
	공공택지사업처장	이상우	1급	2023.01∼
	공공택지사업처장	이원훈	1급	2024.01∼
	도시개발부장	김형욱	2급	2021.01∼	도시개발사업관리
	건축공간계획팀장	김남훈	2급	2022.01∼	택지개발사업관리
	공공택지사업2부장	김경수	2급	2023.01∼
	공공택지사업2팀장	김동인	2급	2024.01∼
	공공택지사업2팀장	이현학	2급	2025.01∼
하남사업본부	본부장	유석태	1급	2021.01∼	하남사업본부 총괄
	본부장	정경호	1급	2022.01∼
	본부장	이영웅	1급	2023.01.∼
	단지사업3부	이성운	2급	2020.01∼	조성개발 업무총괄
	단지사업3부	신동수	2급	2022.01∼	조성개발 업무총괄
	단지사업3부	이동천	2급	2024.01∼	조성개발 업무총괄
	단지사업3팀	조부현	2급	2025.01∼	조성개발 업무총괄
	보상판매	박만수	2급	2021.01∼	보상판매 업무총괄
	보상판매	박상천	2급	2022.01∼	보상판매 업무총괄
	보상부	문기홍	2급	2021.01∼	보상 업무총괄
	보상부	박만수	2급	2022.01∼	보상 업무총괄
	판매팀	한국일	2급	2024.01∼	판매 업무총괄
	판매팀	이주민	2급	2025.01∼	판매 업무총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

소속	직위	성명	담당업무 (업무분담 내용)
국토교통부 공공택지관리과	과장	박우성	공공주택사업 총괄 (인허가 승인)
	사무관	김태현	준공지구 관리 (인허가 승인)

추진실적

- 2010.05.26.  : 지구지정 고시

- 2010.11.11. : 보금자리주택 사전 입주예약 공고

- 2010.11.15. : 지정변경(1차), 지구계획 승인

- 2013.12.17. : 용지보상 착수

- 2014.10.14. : 지정변경(2차), 지구계획(1차) 변경 승인

- 2016.03.31. : 사업시행자 변경(민간공동) 및 공사착공

- 2016.12.28. : 지구계획(2차) 변경 승인

- 2018.08.29. : 지구계획(3차) 변경 승인

- 2019.06.28. : 최초 주민입주

- 2019.10.23. : 지정변경(3차), 지구계획(4차) 변경 승인

- 2020.01.29. : 지구계획(5차) 변경 승인

- 2020.09.23. : 지구계획(6차) 변경 승인

- 2020.12.23. : 지구계획(7차) 변경 승인

- 2020.12.31. : 1단계 사업준공(1,099천㎡)

- 2021.12.24. : 지구계획(8차) 변경 승인

- 2021.12.31. : 지구계획(9차) 변경 승인

- 2022.06.30. : 2단계 사업준공(234천㎡)

- 2022.06.30. : 지구계획(10차) 변경 승인

- 2023.12.01. : 지구계획(11차) 변경 승인

- 2024.03.29. : 지구계획(12차) 변경 승인

- 2024.03.31. : 3단계 사업준공(138천㎡)

- 2024.09.23. : 지구계획(13차) 변경 승인

- 2024.12.30. : 지구계획(14차) 변경 승인

- 2024.12.31. : 4단계 사업준공(215천㎡)