사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2026-34

담당부서

작성자

공공택지사업처/공공택지사업2팀

차장 변종식/055-922-3809/

k7214@lh.or.kr

사 업 명

시흥은계 공공주택지구

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 무주택자의 주택마련을 촉진하여 국민의 쾌적한 주거생활에 이바지하는 공공주택의 원활한 건설하기 위함

○ 추진기간 : 2009.12. ~ 2027.12

○ 총사업비 : 1조 9,753억원

○ 주요내용

- 위치 : 경기도 시흥시 대야동, 은행동 일원

- 면적 : 2,009,606.6㎡

- 주택/인구 : 13,192호 / 33,480인

- 사업시행자 : 한국토지주택공사

○ 추진경과

- 2009.12.03. : 지구지정 고시

- 2010.03.11. : 중앙도시계획위원회 심의

- 2010.04.08. : 통합심의위원회 심의

- 2010.04.27. : 지구지정 변경 및 지구계획 승인

- 2019.03.31. : 1단계 사업준공

- 2021.03.31. : 2단계 사업준공

- 2021.12.31. : 지구지정 변경 및 지구계획 승인

- 2023.04.30. : 3단계 사업준공

- 2025.12.31. : 4단계 사업준공

- 2026.06.30. : 5단계 사업준공(예정)

- 2027.12.31. : 6단계 사업준공(예정)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 담당자 및 담당업무

구분		성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
본사	스마트도시본부장	한병홍	이사	‘19.08~	스마트도시사업 총괄
	국토도시개발본부장	신경철	이사	‘21.07~	국토도시개발사업 총괄
	국토도시본부장	박동선	이사	‘23.11~	국토도시개발사업 총괄
	공공택지사업처장	채우국	1급	‘21.01~	공공택지지구 사업총괄
	공공택지사업처장	문홍철	1급	‘22.01~	공공택지지구 사업총괄
	공공택지사업처장	이상우	1급	‘23.01~	공공택지지구 사업총괄
	공공택지사업처장	이원훈	1급	‘24.01~	공공택지지구 사업총괄
	공공택지사업3부장	강상모	2급	‘21.01~	시흥은계지구 사업총괄
	공공택지사업3부장	최현만	2급	‘22.01~	시흥은계지구 사업총괄
	공공택지사업1팀장	정휘조	2급	‘24.01~	시흥은계지구 사업총괄
	공공택지사업2팀장	이현학	2급	‘25.01~	시흥은계지구 사업총괄
광명시흥사업본부	광명시흥사업본부장	김승철	1급	‘20.01~	시흥은계지구 사업총괄
	광명시흥사업본부장	정문수	1급	‘21.01~	시흥은계지구 사업총괄
	광명시흥사업본부장	조하영	1급	‘22.01~	시흥은계지구 사업총괄
	광명시흥사업본부장	강신은	1급	‘23.01~	시흥은계지구 사업총괄
	광명시흥사업본부장	최용택	1급	‘24.01~	시흥은계지구 사업총괄
	단지사업1부장	윤성호	2급	‘20.01~	시흥은계지구 개발업무
	단지사업1부장	이정희	2급	‘21.01~	시흥은계지구 개발업무
	단지사업3부장	김덕철	2급	‘22.01~	시흥은계지구 개발업무
	단지사업3팀장	이상환	2급	‘24.01~	시흥은계지구 개발업무
	단지사업3팀장	천화영	2급	‘25.01~	시흥은계지구 개발업무
	보상2부장	김영훈	2급	‘20.01~	시흥은계지구 보상업무
	보상부장	이철민	2급	‘21.01~	시흥은계지구 보상업무
	보상부장	김규영	2급	‘22.01~	시흥은계지구 보상업무
	보상부장	이철민	2급	‘23.01~	시흥은계지구 보상업무
	보상1팀장	이재수	2급	‘24.01~	시흥은계지구 보상업무
	보상1팀장	최승창	2급	‘25.01~	시흥은계지구 보상업무

다른기관 또는

민간인 관련자

소속	직위	성명	담당업무 (업무분담 내용)
국토교통부 공공택지관리과	과장	박진호	공공주택사업 총괄 (인허가 승인)
국토교통부 공공택지관리과	사무관	손혜정	시흥은계 개발 (인허가 승인)

추진실적

○ 2020.12.23. : 지구계획 변경(9차) 승인 고시

○ 2021.03.29. : 지구계획 변경(10차) 승인 고시

○ 2021.12.31. : 지구계획 변경(11차) 승인 고시

○ 2022.11.28. : 지구계획 변경(12차) 승인 고시

○ 2022.12.28. : 지구계획 변경(13차) 승인 고시

○ 2023.04.28. : 지정 변경(5차) 및 지구계획 변경(14차) 승인 고시

○ 2023.12.26. : 지구계획 변경(15차) 승인 고시

○ 2024.12.17. : 지구계획 변경(16차) 승인 고시

○ 2025.11.25. : 지구계획 변경(17차) 승인 고시

○ 2026.01.22. : 지구계획 변경(18차) 승인 고시