사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2026-91(1)

담당부서

작성자

글로벌사업처 과장 유성흠

(031-738-4673 / chopin@lh.or.kr)

사 업 명

해외사업(한국-미얀마 경제협력 산업단지(KMIC))

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경 : 국내기업 해외진출 지원을 위한 산업단지 개발

○ 추진기간 : 2019년～미정

○ 총사업비 : 1,311억원

○ 주요내용

- (위    치) 미얀마 양곤주 야웅니핀 지역

- (면    적) 2,249천m2(약 68만평)

- (시행주체) 현지합작법인(KMIC)

- (주주구성) LH(40%), DUHD(미얀마 건설부 도시주택본부)(40%), 글로벌세아(주)(20%)

- (시행방식) 합작법인(JV) 설립을 통한 산업단지 공급

○ 추진경과

- 2015. 9. : MOU 체결(LH ↔ 미얀마 건설부)

- 2017. 6. : MOA 체결(LH ↔ 미얀마 건설부 도시주택본부)

- 2018.12. : 이사회 승인(LH)

- 2019. 2. : 미얀마 투자청(MIC) 투자 승인

- 2019. 8. : 합작법인(KMIC) 계약 체결

- 2019. 9. : 기공식 개최 및 EDCF 차관계약(수출입은행) 체결

- 2020.12. : 단지조성공사 착공

- 2022.11.∼ : 단지조성공사 중지

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 담당자 및 담당업무(본사)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무(업무분담 내용)
처장	안병곤	1급	’24.1～현재	해외사업 총괄
팀장	김재용	2급	’25.1～현재	미얀마사업 총괄
차장	유성흠	4급	‘25.2～현재	미얀마사업 지원

○ 담당자 및 담당업무(KMIC)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무(업무분담 내용)
차장	이창민	3급	‘24.2～현재	KMIC 법인관리 지원

다른기관 또는

민간인 관련자

▢ KMIC 주주

○ [한국] 글로벌세아(주)

○ [미얀마] DUHD(미얀마 건설부 도시주택본부)

추진실적

○ 산업단지 조성공사 착공 후, 미얀마 비상사태 및 경제제재로 인한 사업 환경 악화에 따라 조성공사 중지 중(공정률 6.1%)

사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2026-91(2)

담당부서

작성자

글로벌사업처 과장 이건우

(055-922-4731 / thisiswoo@lh.or.kr)

사 업 명

해외사업(베트남 흥옌성 클린산단)

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경 : 국내기업 해외진출 지원을 위한 산업단지 개발

○ 추진기간 : 2021년～2024년(법인설립～공사 준공)

○ 총사업비 : 1,168억원

○ 주요내용

- (위    치) 베트남 흥옌성 리트엉컷 지역

- (면    적) 1,431천m2

- (시행주체) 현지합작법인(VTK)

- (주주구성) LH(35%), KIND(25%), KBI건설(10%),

신한은행(5%), TDH 에코랜드(25%)

- (시행방식) 합작법인(JV) 설립을 통한 산업단지 공급

○ 추진경과

- 2017. 4. : MOU 체결(LH ↔ 흥옌성 ↔ 에코파크)

- 2018. 2. : MOA 체결(LH ↔ TDH에코랜드)

- 2019. 8. : 사업 예비시행약정서(PIA) 체결(LH ↔ TDH에코랜드)

- 2020. 3. : 이사회 승인

- 2021. 7. : 상대국 투자 승인

- 2021. 9. : 합작법인 설립 및 자본금 출자

- 2022. 9. : 단지조성공사 착공

- 2023. 6. : 토지사용권증서(LURC) 취득완료

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 담당자 및 담당업무(본사)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
처장	선병수	1급	‘17.1～‘17.12	해외사업 총괄
	이정욱		‘18.1～‘18.12
	이정관		‘19.1～‘20.12
	이지순		‘21.1～‘23.12
	안병곤		‘24.1～현재
부장	정은구	2급	‘17.1～‘17.12	베트남사업 총괄
	송경수		‘18.1～‘18.12
	강구황		‘19.1～‘19.12
	이희범		‘20.1～‘20.12
	박성문		‘21.1～‘22.12
	염동석		‘23.1～현재

○ 담당자 및 담당업무(VTK, 베트남 현지 합작법인)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
전문위원	선병수	1급	‘21.9～23.2	VTK 법인관리 총괄
전문위원	한종덕	1급	‘23.3～’25.5	VTK 법인관리 총괄
전문위원	이지순	1급	‘25.5～현재	VTK 법인관리 총괄

다른기관 또는

민간인 관련자

○ [한국] KIND(한국해외인프라도시개발지원공사)

○ [한국] KBI건설

○ [한국] 신한은행

○ [베트남] TDH ECOLAND

추진실적

○ 산업단지 조성공사 착공 및 공사관리(‘24.12월 준공)